OhtuTie-projektin seurantakokous			 			           
pöytäkirja
												
Aika:
	17.6.2004 kello 13.39
Paikka:
	Tietojenkäsittelytieteen laitoksen luokka C455
Läsnä:
	Jyrki Kankaanpää 
	Marianne Korpela (ohjaaja)
	Sinikka Loikkanen 
	Esa-Matti Miettinen (kokouksen sihteeri)
	Janne Nevalainen (kokouksen puheenjohtaja)
	Max Österman

Kokouksen avaus
	Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.39.

Edistymisen seuranta
	Edellisessä seurantakokouksesa perjantaina 11.6. vahvistetun aikataulun mukaan 		määrittelydokumentin oli määrä valmistua maanantaina 14.6. kuten tapahtuikin. 

	Suunnitteludokumentin ensimmäisen version piti valmistua torstaina 17.6. Dokumentti ei 	ollut kokoukseen mennessä valmis.

	Toteutuksen oli määrä alkaa 14.6., ja se olikin jo alkanut. Sinikka oli tehnyt XML-tiedostoja, 	ja Petteri oli jo ohjelmoinut osan luokista. 

	Toteutusdokumentin laatimisen alku oli suunnitelmissa yhdessä toteutuksen aloituksen 		kanssa 14.6. Dokumenttia ei oltu kokoukseen mennessä aloitettu, koska suunnittelu ei ollut 	vielä pättynyt, eikä siitä näin ollen oltu voitu poiketa.	

	Testaussuunnitelman aloituspäiväksi oli suunniteltu 7.6. Suunnitelman kirjoitus alkoi 11.6., 	ja se jatkuu projektisuunnitelman mukaisesti. 

	Käyttöohjeen valmistelun piti käynnistyä 14.6. Suunnittelun ollessa vielä kesken 			käyttöohjetta ei oltu aloitettu. 

Uusi aikataulu
	Suunnitteludokumentin uudeksi valmistumispäiväksi päätettiin keskiviikko 23.6. ja 		katselmointipäiväksi torstai 24.6. 

	Toteutusdokumentin aloituspäiväksi päätettiin alustavasti 24.6.

	Käyttöohjeen aloituspäiväksi sovittiin suunnitteludokumentin valmistumista seuraava 		maanantai 28.6. 
	
	Testaussuunnitelman valmistumispäiväksi sovittiin	2.7. 

	Järjestelmätestaus alkaa 5.7.

Riskien toteutuminen
	Todettiin, että projekti on riskien toteutumisen huomioiden kohtuullisen hyvin aikataulussa.
Seuraava seurantakokous 
	Seuraava seurantakokous pidetään torstaina 24.6.

Kokouksen päättäminen
	Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.07.

Esa-Matti Miettinen
Kokouksen sihteeri