OhtuTie-projektin seurantakokous			 			           
pöytäkirja
												
Aika:
	2.7.2004 kello 9.13
Paikka:
	Tietojenkäsittelytieteen laitoksen luokka C455
Läsnä:
	Jyrki Kankaanpää 
	Marianne Korpela (ohjaaja)
	Petteri Nurmi
	Esa-Matti Miettinen
	Sinikka Loikkanen
	Janne Nevalainen (kokouksen puheenjohtaja)
	Max Österman (kokouksen sihteeri)

Kokouksen avaus
	Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.13

Edistymisen seuranta
Edellisessä kokouksessa päätetty tehdä muutoksia määrittelydokumenttiin. Muutokset kesken.
Testauksen piti alkaa 28.6. Testaus alkanut aikataulun mukaisesti.
Toteutusdokumentin laatiminen piti aloittaa 24.6. Erillistä toteutusdokumenttia ei tehdä vaan se korvataan päivitetyllä suunnitteludokumentilla. Dokumentti valmis 8.7.
	Käyttöohjeen laatiminen on alkanut.
	Loppuraportin laatiminen on alkanut.
Ylläpitodokumentin laatiminen alkaa 6.7.

Uusi aikataulu
Määrittelydokumentti korjattu versio valmiina tiistaina 6.7.2004. Hyväksymiskokous 7.7.2004.
.	Suunnitteludokumentin päivitetty versio valmiina 8.7.
	Käyttöohjeen esiversio asiakkaalle 6.7.
	Testauksen uudeksi päättymispäivämääräksi 8.7.
	Ohjelmakoodin hyväksymiskokous päätetty olla pitämättä.

Riskit
	Sinikka on päässyt jatkamaan projektia, joten riski on jäänyt toteutumatta.

Laitoksen muutosta aiheutuvat riskit tulevat ajankohtaiseksi ensi viikolla. Projektin toiminta siirretään Aleksandriaan. 

Kokouksen päättäminen
	Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.45

Max Österman
Kokouksen sihteeri