OhtuTie-projektin seurantakokous			 			           
pöytäkirja
												
Aika:
	24.6.2004 kello 10.36
Paikka:
	Tietojenkäsittelytieteen laitoksen luokka C455
Läsnä:
	Jyrki Kankaanpää 
	Marianne Korpela (ohjaaja)
	Petteri Nurmi
	Esa-Matti Miettinen (kokouksen sihteeri)
	Janne Nevalainen (kokouksen puheenjohtaja)
	Max Österman

Kokouksen avaus
	Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.36.

Edistymisen seuranta
	Suunnitteludokumentin piti olla valmis 23.6. Dokumentti tarkastettiin tänään.
	Käyttöohjeen laadinnan oli määrä alkaa 28.6. 

	Toteutus on jo alkanut.

	Loppuraportti aloituspäiväksi on merkitty 28.6. Raportin kirjoittaminen on aloitettu.
		
Uusi aikataulu
	Käyttöohjeen kirjoittamisen aloittaminen siirretään 2.7., ja sen esiversion on määrä toimittaa 	asiakkaalle 6.7. Lopullinen versio käyttöohjeesta valmistuu 9.7. Ohjetta ei erikseen 		hyväksytetä asiakkaalla.

	Testaus alkaa 28.6. Testaussuunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi 2.7.  				Järjestelmätestauksen alkupäivänä pidetään edelleen 5.7.

	Ohjelmakoodin hyväksymiskokous pidetään 5.7. 

	Toteutusdokumentin esiversion hyväksymiskokousta ei pidetä.		

	Loppuraportin valmistumispäivänä päätettiin pitää 9.7.

	Määrittelydokumenttiin mahdollisesti tehtävät muutokset päätettiin käsitellä seuraavassa
	seurantakokouksessa.

	Sovittiin, että projektipäällikkö päivittää projektisuunnitelmaa kokouksessa tehtyjen 		päätösten mukaisesti.

Riskit
	Mikäli Sinikka keskeyttää, jää käyttöliittymä muiden tehtäväksi. Työmäärä on osoittautunut 	arvioitua suuremmaksi. Ryhmältä puuttuu myös työssä tarvittavaa osaamista. Osa 			työvälineistä (mm. LaTex) on osoittautunut arvioitua vaikeakäyttöisemmäksi. 

Kokouksen päättäminen
	Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.04.

Esa-Matti Miettinen
Kokouksen sihteeri