OhtuTie-projektin seurantakokous			 		           
pöytäkirja
							
Aika:
	8.7..2004 kello 9.15.
Paikka:
	Oppimiskeskus Aleksandrian luokka 333
Läsnä:
	Jyrki Kankaanpää 
	Marianne Korpela (ohjaaja)
	Sinikka Loikkanen (saapui 9.30)
	Esa-Matti Miettinen (kokouksen sihteeri)
	Janne Nevalainen (kokouksen puheenjohtaja)
	Max Österman

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.20.

Edistymisen seuranta
Loppuraportin laadinnan alku oli merkitty aikatauluun 2.7. Raportti on aloitettu.
	
Määrittelydokumentin päivitetyn version tuli olla valmiina 6.7. ja hyväksyttynä 7.7. Dokumenttia ei oltu hyväksytty.

Ylläpitodokumentin kirjoittamisen oli määrä alkaa 6.7. ja se on myös alkanut.
	
Käyttöohjeen esiversion suunniteltiin valmistuvan 6.7., mutta sellaista ei ole tehty.

Uusi aikataulu
Toteutusdokumentti päätettiin jättää tekemättä ja sen sijaan päivittää muutokset suunnitteludokumenttiin.

Käyttöohjeen esiversio poistetaan aikataulusta.

Päätettiin siirtää projektin päättymispäivä samoin kuin käyttöohjeen, testaus-, suunnittelu- ja ylläpitodokumenttien sekä loppuraportin valmistumispäivä seuraavan viikon torstaille 15.7. Asiakkaalle ilmoitettava päättämispäivän siirtämisestä mahdollisimman pian sekä sovittava Aleksandrian luokassa 333 pidettävän demotilaisuuden kellonaika hänen kanssaan. 

Riskien seuranta
Työmäärään ja osaamistasoon liittyvä arviointiriski on toteutunut. Aikataulua on päivitetty vastatoimena.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.39.